Пошаговый алгоритм дооснащения медицинской организации
Шаг 1. Создать рабочую группу
Состав: начмед (руководитель), зав. офтальмологическим отделением, главная медсестра, инженер по медоборудованию, экономист, IT-специалист, специалист по закупкам.
Шаг 2. Провести инвентаризацию (форма таблицы)
№	Наименование	Модель	Серийный номер	Год выпуска	Год ввода	Техсостояние	Остаточная стоимость	Договор на ТО	
1	Щелевая лампа	SL-120	45678	2018	2019	Исправна	120 000	№ 45/25	
2	Авторефрактометр	AR-3000	98765	2015	2016	Требует ремонта	0	–	
Шаг 3. Сверить с требованиями приказа (форма таблицы)
Позиция по приказу № 633н	Требуется (ед.)	Имеется (ед.)	Соответствует	Примечание	
Система электрофизиологии	1	0	Нет	Подана заявка в ТФОМС	
Микроскоп с цифровой визуализацией	1	1	Да	Carl Zeiss, 2022	
Шаг 4. Оценить техсостояние
●	вызвать сервисную организацию для диагностики;
●	подготовить акты на списание для оборудования с износом 100 процентов.
Шаг 5. Рассчитать потребность
Определить количество единиц с учетом:
●	пропускной способности отделения;
●	графика работы;
●	необходимости резерва;
●	планируемой хирургической активности.
Шаг 6. Проанализировать приоритеты (форма таблицы)
Категория	Критерий	Пример	Срок	
Срочно	Без оборудования помощь невозможна	Микроскоп, факоэмульсификатор	0–3 мес	
Важно	Влияет на качество, критерии ОМС	ОКТ, периметр	3–6 мес	
Желательно	Повышает эффективность	Дополнительный тонометр	6–12 мес	
Шаг 7. Определить источники финансирования
●	целевые субсидии (заявка в региональный минздрав);
●	собственные средства ОМС;
●	средства нормированного страхового запаса ТФОМС;
●	лизинг;
●	программы модернизации.
Шаг 8. Составить «дорожную карту»
Этап	Мероприятие	Срок	Ответственный	Источник	
1	Инвентаризация	2 нед	Инженер	–	
2	Сверка с приказом	1 нед	Зав. отделением	–	
...	...	...	...	...	
10	Ввод в эксплуатацию	По факту	Инженер	–	
Шаг 9. Провести закупки
●	подготовить технические задания;
●	провести конкурентные процедуры (ФЗ-44 или ФЗ-223);
●	заключить договоры.
Шаг 10. Ввести в эксплуатацию
●	монтаж, пусконаладка;
●	обучение персонала;
●	договоры на техобслуживание.